공약 관리번호		A-10-1				공약명		덕산버스정류장 정비사업
사업 구분	사업분류				사업주체						예산구분			이행단계
	계속		신규		국가		경남도		산청군	기타	예산	비 예산		기타	일부추진		정상추진	완료	이행률 (%)
			○						○		○						○		95
소관부서(담당)				경제도시과(교통정책담당)									행정전화			6811

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리 726-28번지 외 2필지

❍ 사 업 량 : 주차장 조성 1,650㎡(부지조성 1,485, 건축 165)

❍ 사 업 비 : 1,750백만원(보상비·건축비·기타 부대경비)

❍ 사업기간 : 2016. 7. ~ 2018. 5.

□ 추진사항

❍ 정류장 정비 또는 이전방안 타당성 연구용역        : 2015. 3. ~ 6.

❍ 정류장 입지분석 주민공청회 실시(2회)              : 2015. 7. ~ 9.

❍ 정류장 정비사업 예산심의 의결                    : 2015. 12.

❍ 정류장 예정부지 측량                             : 2016. 6.

❍ 정류장 예정부지 감정                             : 2016. 6.

❍ 정류장 토지 및 지장물 보상 협의                  : 2016. 7. ~ 10.

❍ 정류장 실시설계 완료                             : 2017. 3.

❍ 정류장 조성공사 착공                             : 2017. 4.

□ 문제점 및 대책

❍ 없음

□ 향후 추진계획

❍ 사업 준공                                        : 2018. 5.