공약 관리번호		A-10-3				공약명		하신마을 소공원 조성사업
사업 구분	사업분류				사업주체						예산구분			이행단계
	계속		신규		국가		경남도		산청군	기타	예산	비 예산		기타	일부추진		정상추진	완료	이행률 (%)
			○						○		○							○	100
소관부서(담당)				농축산과(전원농촌담당)									행정전화			7851

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 신천리 하신마을 일원

❍ 사 업 비 : 793백만원

❍ 사업기간 : 2015. ~ 2017.

❍ 사 업 량 : 죽림공원 조성 A=3,551㎡(주차장, 산책로, 전망대 등)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년 이후	비 고
계	793	130	300	363
국비	555	91	210	254
도비	71	12	27	32
군비	167	27	63	77
기타

□ 추진사항

❍ 2015.  1. : 한국농어촌공사 진주산청지사 위탁계약 체결

❍ 2015.  2. : 기본계획수립 용역 발주

❍ 2015. 12. : 사업부지 선정 및 감정평가 완료

❍ 2016.  9. : 경남도 기본계획 협의 완료

❍ 2016.  9. : 시행계획 수립 용역완료

❍ 2017.  3. : 공사착공

❍ 2017. 12. : 공사준공

□ 향후 추진계획

❍ 2018. 5. : 시설물 인수인계(농어촌공사)