공약 관리번호		A-1-1				공약명		제보지구 도로확포장사업 조기 완공
사업 구분	사업분류				사업주체						예산구분			이행단계
	계속		신규		국가		경남도		산청군	기타	예산	비 예산		기타	일부추진		정상추진	완료	이행률 (%)
	○								○		○				○				35
소관부서(담당)				안전건설과(도로담당)									행정전화			6721

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 제보리 ~ 관동마을

❍ 사 업 비 : 50.5억원

❍ 사 업 량 : 도로 L=3.61km, B=8.0m, 교량 2개소

❍ 사업내용 : 도로확포장

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년 이후	비 고
계	5,050		950		250	3,850
국비
도비
군비	5,050		950		250	3,850
기타

□ 추진사항

❍ 전체 3.61km중 1.51km 사업 완료

❍ 잔여구간(2.1km)은 군도 건설관리계획 재 수립시 반영 중장기적으로 추진

❍ 2018년 차량대피소 5개소 설치

□ 문제점 및 대책

❍ 기존도로 2.1Km 구간이 하천정비기본계획상 하천구역내로서 도로

개설시 하천공사와 병행하여 시행되어야 함

❍ 수혜도(8가구)에 비해 사업비가 과다 소요되며, 사업비 확보 애로

□ 향후 추진계획

❍ 잔여구간(L=2.1km)은 향후 하천공사와 병행 시행