공약 관리번호		A-1-3				공약명		생비량지구 지방상수도 인입공사
사업 구분	사업분류				사업주체						예산구분			이행단계
	계속		신규		국가		경남도		산청군	기타	예산	비 예산		기타	일부추진		정상추진	완료	이행률 (%)
	○								○		○						○		62
소관부서(담당)				상하수도사업소(상수도담당)									행정전화			7011

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사 업 비 : 13,951백만원(국비 9,766 군비 4,185)

❍ 사 업 량 : 배수지 300톤, 관로 L=77.1km, 가압장 4개소, 전기, 제어 등

❍ 사업내용 : 급수구역 확장 등

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년 이후	비 고
계	13,951	2,880	1,143	6,858	1,204	1,866
국비	9,766	1,300	800	4,800	1,000	1,866
도비
군비	4,185	1,580	343	2,058	204
기타

□ 추진사항

❍ 2016. 08월 : 본공사 1차분 준공 및 건설사업관리용역 1차분 착공

❍ 2016. 12월 : 본공사 2차분 준공

❍ 2017. 02월 : 본공사 3차분 착공

❍ 2017. 03월 : 건설사업관리용역 2차분 착공

❍ 2018. 01월 : 본공사 4차분 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 생비량면 지방상수도 인입을 위해 신안면 중촌배수지 증설 필요

⇒ 중촌배수지 증설(480→900톤) 2018년 자체사업 설계 중

□ 향후 추진계획

❍ 2018. 06월 : 건설사업관리용역 2차분 준공 및 3차분 착공

❍ 2018. 07월 : 본공사 3차분 준공

❍ 2018. 12월 : 본공사 4차분 준공