공약 관리번호		A-2-1 B-2-12				공약명		생활체육시설 확충(수영장)
사업 구분	사업분류				사업주체						예산구분			이행단계
	계속		신규		국가		경남도		산청군	기타	예산	비 예산		기타	일부추진		정상추진	완료	이행률 (%)
			○						○		○						○		60
소관부서(담당)				문화관광과(체육담당)									행정전화			6411

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 930-1번지 일원

❍ 사 업 비 : 5,200백만원(국 2,080, 도 1,500 군1,620)

❍ 사 업 량 : 생활체육시설 설치 1식

❍ 사업내용 : 수영장(25m*4레인), 체력단련장 등

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년 이후	비 고
계	5,200			3,060	500	1,640
국비	2,080			1,560		520
도비	1,500			1,500
군비	1,620				500	1,120
기타

□ 추진사항

❍ 2015.  7. : 기본계획 수립

❍ 2015.  9. : 공유재산 관리계획 승인

❍ 2015. 11. : 기본계획 및 타당성 조사용역

❍ 2016.  5. : 경상남도 지방재정투자심사

❍ 2016. 12. : 예산(국비) 확보

❍ 2017.  3. : 예산(도비) 확보

❍ 2017. 5. ~ 10. : 주민간담회 실시(3회)

❍ 2017.  7. : 건축설계 공모(조달청)공사 착공

❍ 2017.  9. : 실시설계용역 시행

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2018.  5. : 실시설계용역 완료

❍ 2018.  6. : 공사 착공

❍ 2019. 12. : 공사 준공 및 운영