공약 관리번호		A-3-2				공약명		오전지구 공공하수처리시설 설치사업
사업 구분	사업분류				사업주체						예산구분			이행단계
	계속		신규		국가		경남도		산청군	기타	예산	비 예산		기타	일부추진		정상추진	완료	이행률 (%)
			○						○		○						○		85
소관부서(담당)				상하수도사업소(하수도담당)									행정전화			7021

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 오부면 오전리 일원

❍ 사 업 비 : 7,464백만원

❍ 사 업 량 : 하수처리장 130톤/일, 하수관로 L=15.75km, 배수설비 337가구

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년 이후	비 고
계	7,464		3,285	4,179
국비	5,225		2,300	2,925
도비	448		197	251
군비	448		197	251
기타	1,343		591	752

□ 추진사항

❍ 2014. 12월 : 실시설계용역 착수

❍ 2015.  2월 : 산청군 하수도정비 기본계획(부분)변경 승인 요청

❍ 2015.  4월 : 산청군 하수도정비 기본계획(부분)변경 승인 통보

❍ 2015.  9월 : 하수처리시설 공법 심의 선정(SNR공법)

❍ 2015. 12월 : 실시설계완료

❍ 2016.  7월 : 1차분 착공

❍ 2017.  3월 : 2차분 착공

❍ 2017.  9월 : 1차분 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

□ 향후 추진계획

❍ 2018. 7월 : 사업 준공 예정