공약 관리번호		A-4-1				공약명		내리마당재 진입로 확포장공사
사업 구분	사업분류				사업주체						예산구분			이행단계
	계속		신규		국가		경남도		산청군	기타	예산	비 예산		기타	일부추진		정상추진	완료	이행률 (%)
			○						○		○				○				40
소관부서(담당)				안전건설과(건설행정담당)									행정전화			6701

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2015. ~ 2018.

❍ 사업내용 : 기존 폭 5m 도로로 인하여 차량 교행이 어려운 부분을

도로폭 확장을 통해 차량이 자유롭게 교행할 수 있도록 사업추진

❍ 사 업 비 : 500백만원(2015년 : 200, 2018년 : 300)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년 이후	비 고
계	500	200			300
국비
도비
군비	500	200			300
기타

□ 추진사항

❍ 2015. 1. ~  2. : 고속도로 육교 가각부 실시설계용역

❍ 2015. 2. ~ 11. : 고속도로 육교 가각부 사업착공 및 완공

❍ 2017. 10.      : 추가예산 확보

□ 문제점 및 대책

❍ 도로확장은 기존 주택으로 인해 하천측으로 확장이 불가피함에 따라 하천 통수 단면을 확보하면서 도로를 확장해야 하는 어려움이 있으며 사업비가 과다하게 소요될 수 있음으로 최적으로 방안을 강구토록 하겠음

❍ 기존 도로 및 하천 확장부 대부분이 사유지로 해당 토지 소유자와 편입부지 협의를 위하여 지속적으로 협의 중에 있음.

□ 향후 추진계획

❍ 2018. 1. ~ 2018. 12. : 편입부지 보상협의 및 사업시행