공약 관리번호		A-4-4				공약명		지리자연재해 위험개선지구 정비사업
사업 구분	사업분류				사업주체						예산구분			이행단계
	계속		신규		국가		경남도		산청군	기타	예산	비 예산		기타	일부추진		정상추진	완료	이행률 (%)
	○								○		○						○		95
소관부서(담당)				안전건설과(자연재난담당)									행정전화			6731

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 지리일원

❍ 사업기간 : 2014. ~ 2018.

❍ 사 업 비 : 14,564백만원

❍ 사 업 량 : 배수펌프장 180㎥/min, 하천정비 L=240m,

교량신설 L=36m, 고지 배수로 L=363m

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년 이후	비 고
계	16,298	4,000	4,664	5,900	0	-
국비	8,149	2,000	2,332	2,950	0	-
도비	2,444	600	700	885	0	-
군비	5,705	1,400	1,632	2,065	0	-
기타	-	-	-	-	-	-

□ 추진사항

❍ 2014.  3. 11 : 실시설계 용역 계약

❍ 2014.  4.  2 : 실시설계 용역 착수

❍ 2014.  9.  2 : 산청군의회 보고

❍ 2014.  9. 18 : 경상남도 협의(안전총괄과)

❍ 2014. 10. 17 : 사전설계 검토(소방방재청)

❍ 2014. 12.  5 : 사전설계 재검토 요청(국민안전처)

❍ 2015.  1.  9 : 사전설계 검토 승인(조건부)

❍ 2015.  5. 26 : 실시설계 용역 준공

❍ 2015.  6. 29 : 공사착수(총괄, 1차분)

❍ 2015. 11. 11 : 건설사업관리용역 착수

❍ 2016. 01. 14 : 공사착수(2차분)

❍ 2017. 03. 17 : 공사착수(3차분)

❍ 2017. 10. 30 : 공사착수(4차분)

□ 문제점 및 대책

❍ 국가하천 수위상승시 마을 침수방지로 파라펫 설치에 따른 인근 주택 조망권침해 및 마을배수로 배수펌프장 연결 작업시 소음 및 진동으로 주택 피해 우려

→ 주민의 안전을 위한 공익 사업임으로 계속적인 협의와 협조를 요구

□ 향후 추진계획

❍ 2018. 12. : 공사준공예정