공약 관리번호		A-4-5, A-4-6 B-2-6				공약명		산청군 산엔청복지관 건립
사업 구분	사업분류				사업주체						예산구분			이행단계
	계속		신규		국가		경남도		산청군	기타	예산	비 예산		기타	일부추진		정상추진	완료	이행률 (%)
			○						○		○							○	100
소관부서(담당)				주민생활지원과(복지장애인담당)									행정전화			6501

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청읍 산엔청로 67(舊 보건의료원)

❍ 추진기간 : 2014. 1. ~ 2016. 6.

❍ 사 업 량 : 건물 1동 신축

- 부지면적 : 3,366㎡

- 건물 연면적(건축면적) : 1,982.52㎡(1,259.16㎡) /지상3층

❍ 사 업 비 : 4,644백만원(분권844 기금919 도비1,000 군비1,881)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년 이후	비 고
계	4,644	1,899	2,745	-	-	-	-
국비	1,763	1,102	661
도비	1,000	94	906
군비	1,881	703	1,178
기타

□ 추진사항

❍ 2013. 5.  : (구)보건의료원 건물 안전진단 실시

❍ 2013. 9.  : 노인․장애인복지관 건립(구,의료원 리모델링)계획 수립

❍ 2013. 10. : 군자체 지방재정 투․융자심사 승인(31억원)

❍ 2013. 11. : 2013~2017년 중기지방재정계획 반영(31억원)

❍ 2014. 1.  : 2014년도 분권교부세 대상사업 확정

❍ 2014. 2.  : 노인․장애인복지관 건립(신축)계획 수립

❍ 2014. 4.  : 2015년도 복권기금사업 신청 및 확정

❍ 2014. 6.  : 복지관 건립 군정조정위원회 심의(신축)

❍ 2014. 7.  : 기본 및 실시설계 용역 시행

❍ 2014. 10. : 2015~2019년 중기지방재정계획 반영(46억원)

❍ 2014. 12. : 도 재정지원사업(도비 10억) 및 2015년 군비 확정

❍ 2014. 12. : 지방재정 투자심사(재심사) 의뢰(도 재심사 : 사업비 증가)

❍ 2015.  2. : 복지관신축 기본 및 실시설계 용역 준공 /건축협의 완료

❍ 2015.  2. : 복지관 신축공사 시행 및 계약심사 의뢰

❍ 2015.  3. : 지방재정 투자사업 도(재심사) 승인

❍ 2015. 2.~3. : 계약심사 완료 및 입찰 공고

❍ 2015. 4. 9 ~ : 공사 착공

❍ 2015. 7 : 지반약화로 인한 기초파일시공 실정보고, 설계변경

❍ 2015. 7.20. : 경남도 설계변경 심사 승인(251백만원 증액)

❍ 2015. 8. 1 ~ 9. 14. : 기초파일공사

❍ 2015. 9. 15  : 건축공사 시공

❍ 2016. 4.  : 산청군 산엔청복지관 설치 및 운영 조례 제정

❍ 2016. 5.  : 산엔청복지관 운영 계획(안) 수립

❍ 2016. 9.  : 산엔청복지관 민간위탁 동의안 의결

❍ 2016. 11. 25 : 3층 건축물 준공

❍ 2016. 11. 10 ~ 11. 29 : 수탁업체 선정 공고

❍ 2016. 12. 14 : 수탁업체 선정(한일복지재단)

❍ 2017. 1. 10 : 위․수탁 계약서 체결

❍ 2017. 1. 16 : 복지관 종사자 채용

❍ 2017. 1.  ~ 2017. 2.  : 사무기구 및 비품구입

❍ 2017. 2. 01 : 산엔청복지관 운영

❍ 2017. 2. 28 : 산엔청복지관 개관

□ 향후 추진계획

❍ 2017. 3. 1 ~ 현재 : 산엔청복지관 운영 지원