공약 관리번호		A-9-4				공약명		덕천강 고향의강 조성사업
사업 구분	사업분류				사업주체						예산구분			이행단계
	계속		신규		국가		경남도		산청군	기타	예산	비 예산		기타	일부추진		정상추진	완료	이행률 (%)
	○								○		○						○		70
소관부서(담당)				안전건설과(하천담당)									행정전화			6711

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2011. ~ 2019.

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리 ~ 삼장면 대포리 일원

❍ 사 업 비 : 28,249백만원

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=5.1km

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년 이후	비 고
계	28,249	12,027	2,999	4,166	4,166	4,891
국비	16,949	7,240	1,799	2,500	2,500	2,910
도비	3,390	1,448	360	500	500	582
군비	7,910	3,339	840	1,166	1,166	1,399
기타

□ 추진사항

❍ 2011.  11월 : 실시설계 용역 착수

❍ 2012.  07월 : 설계 경제성검토(VE)

❍ 2013.  08월 : 총사업비 조정 협의(부산지방국토관리청)

❍ 2013.  10월 : 건설기술 심의(경상남도)

❍ 2013.  12월 : 보상금 지급 통보 및 공고

❍ 2015.  12월 : 공사발주 및 착공

❍ 2017.  12월 : 1차~3차분 준공

❍ 2018.  01월 : 4차분 시행중(전체공정률 70%)

□ 문제점 및 대책

❍ 사업비(군비) 과다로 인한 예산 확보 애로

□ 향후 추진계획

❍ 2019.  12월 : 사업 준공