공약 관리번호		B-2-1				공약명		도시가스(LNG) 라인 구축 및 확대
사업 구분	사업분류				사업주체						예산구분			이행단계
	계속		신규		국가		경남도		산청군	기타	예산	비 예산		기타	일부추진		정상추진	완료	이행률 (%)
			○							○	○						○		35
소관부서(담당)				경제도시과(지역경제담당)									행정전화			6801

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내

❍ 공사기간 : 2018. ~ 2021.(4년간)

❍ 사 업 비 : 약 506억원(가스공사 435, 군비 40, 민간[시공업체] 31)

❍ 공급대상 : 2,000가구(주택 1,900, 영업용 80, 산업용 20)

❍ 주요공정 : 함양~산청 주배관 건설 20.5km, 시내 공급관로 18km

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총 액	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년이후	비 고
계	506	-	-	20	242	244
가스공사	435	-	-	20	207	208
도비	-	-	-	-	-	-
군비	40	-	-	-	20	20
기타	31	-	-	-	15	16

□ 추진사항

❍ 2015. 12. 28  : 제12차 장기 천연가스 공급계획 확정(우리군 포함)

❍ 2017. 10월  : 제12차 천연가스공급 시행 결정

❍ 2018. 3. 30 : 천연가스 공급 시행 산자부 협의완료

□ 문제점 및 대책

❍ 산업통상자원부 1․2차 협의 지연(담당자 교체 등)

□ 향후 추진계획

❍ 도시가스 공급권역 선정고시 사업자 선정(경남도)	:‘18. 4월 ~ 5월
❍ 공급관리소 및 주배관 설치(한국가스시설공사) - 설계용역 공고 및 계약 - 건설공사 공고 및 계약	:‘18. 4월 :‘18. 8월 ~ 11월
❍ 도시가스 공급	:‘21. 4월