공약 관리번호		B-2-11				공약명		곤충자원화 거점보육센터 조성
사업 구분	사업분류				사업주체						예산구분			이행단계
	계속		신규		국가		경남도		산청군	기타	예산	비예산		일부추진		정상추진	완료	이행률(%)
			○						○		○					○		40
소관부서(담당)				농축산과(축산내수면담당)									행정전화		7831

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면 양곡리 183번지 일원

❍ 소요예산 : 1,667.2백만원(국비 1,166.2, 도비 150, 군비 351)

❍ 사업내역 : 곤충사육시설 및 체험시설·교육장, 식용곤충 제품화 교육

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2018년까지(3개년)

□ 투자계획

❍ 총사업비 1,667.2백만원(16년 180.2, 17년 1,323, 18년 164)을 투입하여         곤충자원화 거점보육센터(곤충사육기반시설, 체험시설 및 교육장 등) 조성

□ 추진사항

❍ ‘16. 4월 : 지역행복생활권 연계협력사업 신규사업 확정

❍ ‘16. 12월 : 공유재산관리계획 승인(산청군의회)

❍ ‘17. 05월 : 한국농어촌공사 진주산청지사 위(수)탁 계약 체결

❍ ‘17. 12월 : 실시설계 완료

❍ ‘18. 01월 : 인허가 완료

❍ ‘18. 02월 : 사업착공(오성종합건설(주))

□ 문제점 및 대책

❍ 인근 주민들 일부에서 사업추진 및 상수원 집수정 오염 우려

- 사업추진에 대한 설명 및 환경 오염 우려 등에 대한 이해

□ 향후 추진계획

❍ ‘18. 10월 : 사업준공

❍ ‘18. 12월 : 사업완공