구 분	관리번호	공약사업	담당부서	상하수도과 상수도담당 (담당자 홍순일, 7011)
	5-7
추진실적	70% (정상추진)		완료예상	2026년 6월
			목표달성여부	여

상수도 시설 확충

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2017. 1 ~ 2026. 6.

❍ 위       치: 산청군 일원

❍ 총 소요예산: 금86,008백만원(국비 39,428, 도비 30,355, 군비 16,225)

- 단성급수구역: 19,360백만원

- 시천급수구역: 10,000백만원

- 삼장지구 인입공사(2공구): 10,900백만원

- 단성급수구역 비상공급망 구축사업: 11,348백만원

- 산청·생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업: 24,400백만원

※ 산청급수구역(오부·금서지구) 준공완료(10,000백만원)

❍ 사 업 내 용

- 정수장증설(시천, 산청・생초), 배수지 설치(삼장), 관로매설 L=120km,

- 비상공급망 구축, 가압장 및 감압변 1식 등

□ 주요 추진사항

❍ 삼장2지구(3차분) 공사 착공                        : 2022.  7월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 공사 착공       : 2022.  7월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 설계용역 착공      : 2022. 11월

❍ 단성정수장증설(5,700톤) 준공                       : 2022. 12월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 공사 착공       : 2023.  6월

❍ 단성정수장증설(단성·신안지구) 공사 착공          : 2023.  6월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 준공            : 2023.  8월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 2차분 착공      : 2023. 10월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 경제성검토         : 2023. 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
86,008	86,008	43,310	92,524	24,968	52,220	15,336	-	49,826	3,560	36,605	9,661	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	86,008	42,698	8,784	8,784	12,871	12,871	-	-
국비	39,428	21,408	-	-	9,010	9,010	-	-
도비	30,355	15,615	5,440	5,440	1,930	1,930	-	-
군비	16,225	5,675	3,344	3,344	1,931	1,931	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
상수도 시설 확충	합계	49,826	18,769	14,752	8,361	18,361	10,408	16,713	-
	국비	3,560	3,720	2,660	1,379	900	2,341		-
	도비	36,605	10,773	9,652	4,597	14,022	6,1764	12,931	-
	군비	9,661	4,276	2,440	2,385	3,439	1,891	3,782	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 착공                    : 2024.  1월

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 건설사업관리용역 착공   : 2024.  1월

❍ 시천급수구역(비상취수원신설) 착공                    : 2024.  3월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 건설기술심의 협의     : 2024.  5월

❍ 삼장 2공구 전체 준공                                : 2024.  5월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 준공               : 2024.  6월
❍ 산청․생초지구(산청․생초 정수장) 착공	: 2024.  8월

❍ 산청․생초지구(산청․생초 정수장) 건설사업관리용역 착공  : 2024. 10월

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 전체 준공               : 2025.  6월

❍ 산청․생초지구(산청․생초 정수장) 전체 준공	: 2026.  6월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	상하수도과 상수도담당 (담당자 김종현)
	5-7
추진실적	35% (정상추진)		완료예상	2025년
			목표달성여부	여

상수도 시설 확충

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2025년

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 소요예산 : 86,008백만원(국비 39,428, 도비 30,355, 군비 16,225)

❍ 사업내용

- 정수장증설(단성,시천,산청·생초), 배수지(오부,삼장),

- 관로매설 L=220km, 가압장 및 감압변 설치 등

□ 추진사항

❍ 산청급수구역(금서) 착공                              : 2021.   4월

❍ 산청급수구역(오부) 착공                              : 2021.   5월

❍ 단성정수장 증설 3차분 착공                          : 2022.   1월

❍ 삼장2지구(3차분) 착공                                : 2022.   6월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 착공               : 2022.   6월

❍ 산청급수구역(오부) 준공 완료                         : 2022.   9월

❍ 산청생초지구(산청생초정수장) 설계용역 착공           : 2022.  11월

❍ 단성정수장 증설(3차분) 준공 완료                     : 2022.  12월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	86,008	51,482	8,784	12,871	12,871
국비	39,428	21,408		9,010	9,010
도비	30,355	21,055	5,440	1,930	1,930
군비	16,225	9,019	3,344	1,931	1,931
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 사전 행정절차를 조속히 처리하여 사업 발주

□ 향후 추진계획

❍ 시천급수구역(시천정수장) 착공                        : 2023.  2월

❍ 산청급수구역(금서) 준공                              : 2023.  3월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 준공               : 2023.  9월

❍ 삼장2지구(3차분) 준공                                : 2023.  11월

❍ 산청·생초지구(산청·생초정수장) 설계용역 준공       : 2023.  11월

❍ 시천급수구역(시천정수장) 준공                        : 2024.  12월