관리번호	4-5	담당부서	관광진흥과 관광개발담당 (담당자 김성훈)
추진실적	10% (정상추진)	완료예상	2021년 12월

곽종석 생가 정비사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2021년 12월

❍ 위    치 : 산청군 단성면 사월리 1340번지외 1필지

❍ 소요예산 : 3,300백만원(특교 1,100, 도비 200, 군비 2,000)

❍ 사업내용 : 체험관 및 생가건립 360㎡, 주차장 및 테마공원 1식

□ 추진사항

❍ 2018. 11월 : 중기지방재정계획 반영

❍ 2019. 02월 : 지방재정투자심사 승인

❍ 2019. 03월 : 공유재산관리계획 승인

❍ 2019. 06월 : 부지매입완료(5,406㎡)

❍ 2019. 04월 ~ 11월 : 실시설계 (건축, 토목, 조경 등)

❍ 2019.11월~ 2020.03월  : 실시설계 완료(도 문화재현상변경신청 심의중 )

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	3,300	2,300	1,000	-	-	-
국비	1,100	1,100	-	-	-	-
도비	200	200	-	-	-	-
군비	2,000	1,000	1,000	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 문화재 보존영향검토대상 구역으로 문화재 현상변경에 어려움이 있음

(현재 설계는 정체성이 모호하므로 정체정이 있는 시설로 확정하여 추진)

- 문화재위원과 사전 협의하여 사업추진 예정

❍ 예산부족 : 2021년 본예산 및 2020년 추경예산 확보 예정

□ 향후 추진계획

❍ 2020.02월~03월  : 건축허가 및 문화재현상변경 허가

❍ 2020.03월~12월 : 본예산 및 추경예산

❍ 2021.01월~12월 : 공사착공 및 준공

□ 현황사진