관리번호	2-3	담당부서	복지지원과 여성가족담당
추진실적	20%(정상추진)	완료예상	2021년 12월

산청복지타운 신축

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2021년

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 옥산리 725번지 일원

❍ 소요예산 : 5,100백만원(국 2,400 도 750 군 1,950)

❍ 사업내용 : 산청복지타운 건립(1동, 2층 2,237㎡)

□ 추진사항

❍ 2018.  4월 : 기본계획 수립 및 지방재정투자심사 승인

❍ 2018. 11월 : 공유재산관리계획 승인

❍ 2019. 10월 : 2020년 생활SOC 복합화사업 선정, 사업비 확보(국도비 3,150백만원)

❍ 2020. 10월 : 기본 및 실시설계 완료, 계약심사, 건축협의

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	5,100	2,550	2,550
국비	2,400	1,200	1,200
도비	750	525	225
군비	1,950	825	1,125
기타

□ 향후 추진계획

❍ 2021.  1월 : 공사 착공

❍ 2021. 12월 : 공사 준공

❍ 2022.  3월 : 개관

□ 현황사진