관리번호	4-3	담당부서	문화체육과 체육시설담당 (담당자 박종구)
추진실적	20%(정상추진)	완료예상	2020년 6월

경호강 관광화 사업(래프팅시설, 체육시설) 시행

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2020년

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 옥산리 865-2번지 일원

❍ 소요예산 : 800백만원(국비 290 군비 510)

❍ 사업내용 : 래프트 적치장 1식, 기타 편의시설 1식

□ 추진사항

❍ 2018. 12월 : 2019년 사업예산(3억원) 확보

❍ 2019.  3월 : 화장실 설치를 위한 사전행정절차 이행

❍ 2019.  9월 : 2020년 사업예산(5억원) 확보

❍ 2019. 12월 : 래프팅 관계자 간담회 개최

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	800	300	500
국비	290	90	200
도비
군비	510	210	300
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 경호강 관광화사업과 연계한 종합발전계획에 의거 사업추진 필요

→ 산청읍 농촌중심지 활성화사업을 통한 조산공원 주변 체육시설 정비 및        주민 편의시설 확충

❍ 래프팅시설물 설치를 위한 래프팅협회 협의지연

→ 래프팅 시즌 전·후 래프팅 타운 내 관광객 편의시설 확충

□ 향후 추진계획

❍ 2020.  2월 : 실시설계용역 시행

❍ 2020.  3월 : 공사 착공

❍ 2020.  6월 : 공사 준공

□ 현황사진