관리번호	4-7	담당부서	문화체육과 문화예술담당 (담당자 천혜원)
추진실적	10% (정상추진)	완료예상	2020년 8월

남부지역 공공도서관 건립

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2020년(2년간)

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 932-1번지

❍ 소요예산 : 3,850백만원(국비 1,600 군비 2,250)

❍ 사업내용 : 공공도서관 1동 건립(연면적 1200㎡ 지상2층)

□ 추진사항

❍ 2018.  2월 : 산청군 지방 재정투자심사 승인

❍ 2018.  3월 : 2018년 상반기 공공도서관 건립지원사업 사전평가 실시(결과 : 적정)

❍ 2018.  7월 : 공유재산관리계획 의결

❍ 2019.  1월 : 산청군 ↔ 경상남도교육청 도서관 건립운영에 대한 협약체결

❍ 2019.  4월 : 기본 및 실시설계용역 발주

❍ 2019. 11월 : 구)신안보건지소 철거

❍ 2020.  2월 : 공사착수

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	3,850	1,800	2,050
국비	1,600	700	900
도비
군비	2,250	1,100	1,150
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 2020.  8월 : 공사준공

❍ 2020. 10월 : 도서관 개관

□ 현황사진