관리번호	4-14	담당부서	관광진흥과 관광개발담당
추진실적	5%(정상추진)	완료예상	2022년 12월

문익점 생가건립사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 3월~ 2022. 12월

❍ 위    치 : 산청군 단성면 사월리 477-1번지

❍ 소요예산 : 3,565백만원

❍ 사업내용 : 목화체험관(문익점생가포함), 목화테마거리, 목화프로그램 등

□ 추진사항

❍ 2018. 7월 : 사업타당성 및 기본계획

❍ 2018. 11월 : 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 승인

❍ 2020. 1월 ~ 8월 : 목화테마거리 실시설계용역 시행

❍ 2020. 10월 : 문화재 현상변경 조건부 허가(목화테마거리 조성)

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	3,565	1,665	490	1,110
국비(균특)	1,350	400	245	705
도비	405	120	73.5	211.5
군비	1,810	1,145	171.5	493.5
기타	-

□ 문제점 및 대책

❍ 부지매입 협의 애로 : 지속적 협의를 통한 사업의 필요성 설명

❍ 문화재보호구역으로 현상변경허가 장기간 소요 : 사업당위성 설명

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 2월 ~ 9월 : 부지매입 협의

❍ 2021. 9월 ~ 2022. 12월 : 사업 착공 및 사업 준공

□ 현황사진