관리번호	4-9	담당부서	관광진흥과 관광개발담당
추진실적	10%(정상추진)	완료예상	2022년 12월

단계한옥마을 관광자원 개발사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2022. 12월

❍ 위    치 : 산청군 신등면 단계리 일원

❍ 소요예산 : 3,000백만원

❍ 사업내용 : 토석담장 복원(L=300m), 마을안길정비, 주차장확보 등

(한옥 홍보관 건립 등)

⇒ 문화재담당에서 문화재보수(토석담장 복원 및 한옥주택 보수 완료)

□ 추진사항

❍ 2019. 2월 : 단계한옥마을 기본계획 완료

❍ 2019. 2월 : 지방재정투자심사 승인

❍ 2019. 12월 : 시도자율편성 예산 확보

❍ 2020. 8월 : 저잣거리조성사업 건축설계용역 완료

❍ 2020. 10월 : 저잣거리조성사업 착공

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	3,000	800	800	1,400
국비(균특)	1,500	400	400	700
도비	450	120	120	210
군비	1,050	280	280	490
기타		-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 문화재보호구역으로 현상변경허가 장기간 소요 : 사업당위성 설명

※ 이충무공 유적지 주변(자체사업) 부지매입 애로 : 지속적 협의를 통한

사업의 필요성 설명

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 4월 : 저잣거리조성사업 준공

❍ 2021. 2월 : 한옥 홍보관 실시설계용역 시행

□ 현황사진