관리번호	1-3	담당부서	경제전략과 에너지관리담당 (담당자 손숙남)
추진실적	20%(정상추진)	완료예상	2021년 12월

도시가스 공급사업 조기 시행(2021년)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2023년(5년간)

❍ 위    치 : 산청읍 금서면 소재지 일원

❍ 소요예산 : 524억원(군비 70, 도비 3, 가스공사 330, GSE 108, 자부담 13)

❍ 사업내용 : 고압배관(함양군 → 금서면) 19.53km, 중저압배관 44.18km

❍ 시 행 사 : 고압배관(한국가스공사), 중저압배관(㈜지에스이)

❍ 공급대상 : 2,445세대(주택 2,185, 일반 242, 기타 18)

2020년 사업추진 계획

❍ 사업량 :고압배관 15km(금서), 중저압배관 10km(금서면‧‧산청읍), 공급관리소공사(금서BV,산청VS)

❍  사업비 :20,433백만원(군비 1,555, 도비 150, 한국가스공사 15,000, GSE 3,728)

□ 추진사항

❍ KDI 예비타당성 조사 통과(기획재정부)                          : ‘17. 10.

❍ 도시가스 공급 협약(도,군,도시가스공급사, 한국가스공사)       : ‘18. 10.

❍ 경상남도 투자심사 완료                                       : ‘19. 03.

❍ 2019년 사업완료(고압배관 2.0km, 중저압배관 4.7km, 금서지구)     :  ‘19. 12.

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	52,401	9,250	20,433	15,775	3,754	3,189
도비	300	-	150	150	-	-
군비	7,008	850	1,555	1,424	1,715	1,464
자부담	1,282	-	-	861	272	149
GSE	10,811	2,400	3,728	1,340	1,767	1,576
가스공사	33,000	6,000	15,000	12,000	-	-

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항없음

□ 향후 추진계획

❍ 고압배관 공사 시행(한국가스공사)                     :‘19. 8. ~ ’21. 12.

❍ 관내 중‧저압배관공사(GSE)                           :‘19. 5. ~  ’23. 12.

❍ 도시가스 최초 공급                                 :‘21. 12.

□ 현황사진