관리번호	1-3	담당부서	경제전략과 에너지관리
추진실적	30%(정상추진)	완료예상	2021년 12월

도시가스 공급사업 조기시행(2021년)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2023년(5년간)

❍ 위    치 : 산청읍 소재지, 금서면 일원

❍ 사 업 량 : 주배관(함양군→금서면) 19.53km, 중저압배관 44.18km

❍ 사 업 비 : 524억원(군비 70, 도비 3, 가스공사 330, GSE 108, 자부담 13)

❍ 공급대상 : 2,445세대(주택 2,185, 일반 242, 기타 18)

❍ 시 행 사 : 주배관 건설(한국가스공사), 저압배관 건설(㈜지에스이)

< 2021년 사업추진 >

• 사업량 : 고압배관 3.53km, 관리소 2개소,  중저압배관 9.815km

• 사업비 : 15,775백만원(군비 1,424, 도비 150, 시공사 13,340, 주민 861)

□ 추진사항

❍ KDI 예비타당성 조사 통과(기획재정부)                       : 2017. 10월

❍ 도시가스 공급 협약(도,군,도시가스공급사,한국가스공사)       : 2018. 10월

❍ 경상남도 투자심사 완료                                     : 2019.  3월

❍ 2019년 사업완료(주배관 2.0km, 중저압배관 4.7km, 금서지구)  : 2019. 12월

❍ 2020년 사업완료(주배관 16km, 중저압배관 10.2km)           : 2020. 12월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	52,401	29,683	15,775	3,754	3,189
도비	300	150	150	-	-
군비	7,008	2,405	1,424	1,715	1,464
자부담	1,282	-	861	272	149
GSE	10,811	6,128	1,340	1,767	1,576
가스공사	33,000	21,000	12,000	-	-

□ 향후 추진계획

❍ 주배관 및 관리소(2개소) 공사 시행(한국가스공사)  : 2019. 8. ~ 2021. 12월

❍ 관내 중‧저압배관공사(GSE)                        : 2019. 5. ~ 2023. 12월

❍ 도시가스 최초 공급                              : 2021. 12월

□ 현황사진