관리번호	1-1	담당부서	도시교통과 주택담당
추진실적	40%(정상추진)	완료예상	2022년 12월

대형아파트 건립 유치(산청읍, 단성면, 신안면)

□ 사업개요

구분	사 업 명	위 치	기 간	사업주체	사 업 량	사업비 (백만원)	추 진 사 항
	계					54,980
산청읍	산청옥산공공 임대주택사업	산청읍 옥산리 525 일원	2017. ~ 2022.	LH, 산청군	공공임대주택 150세대	26,190	◦착공: 2021. 1. ◦입주자 모집공고: 2021. 3. ◦준공: 2022. 8.
단성면	MH미르젠 아파트	단성면 성내리 601 일원	2017. 11. ~ 2020. 3.	㈜엠에이치건설 외 1	아파트 3동, 64세대	10,290	◦준공: 2020. 8. (사업완료)
신안면	신안면사무소 복합개발사업	신안면 하정리 753일원	2018. 4. ~ 2022. 6.	LH, 산청군	공공임대주택 86세대	18,500	◦착공: 2021. 3. ◦준공: 2022. 12.

□ 추진사항

❍ 산청읍 : 2021. 1월 착공, 2021. 3월 입주자 모집 공고예정, 2022. 8월 준공예정

❍ 단성면 : 2020. 8월 준공(사업완료)

❍ 신안면 : 2021. 3월 착공 예정, 2022. 12월 준공예정

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	54,980	11,790	32,940	10,250
국비
도비
군비	10,790	1,500	6,290	3,000
기타	44,190	10,290	26,650	7,250

□ 향후 추진계획

❍ 산청읍 공공임대아파트는 현재 공사 진행 중이며, 2022. 8월 준공토록 독려

❍ 신안면 공공임대아파트는 2021. 3월 착공토록 독려

□ 현황사진

▲ 산청읍(마을정비형 공공주택사업)	▲ 신안면(신안면사무소 복합개발사업)
▲ 단성면(MH미르젠아파트 신축공사)