관리번호	1-2	담당부서	경제전략과 지역경제담당
추진실적	10%(정상추진)	완료예상	2021년 12월

전통시장 환경정비(단성, 단계시장)

□ 사업개요

구 분	단성시장	단계시장
사업기간	2019 ~ 2021	2019 ~ 2021
위 치	단성시장 일원	단계시장 일원
사 업 량	◦ 화장실 개축 1식 ◦ 노후전선정비 1식	◦ 아케이드, 야간조명설치, 쉼터조성 등 ◦ 저잣거리조성(건축리모델링 5개동, 도막형바닥포장 A=1,180㎡)
사 업 비	416백만원 (국 56, 도 115, 군 234, 한전 11)	881백만원 (국 57, 도 8, 군 296, 균특전환 520)
사업내용	2020 전통시장 시설현대화사업 및 2021 노후전선정비사업 연계 추진	신등면 농촌중심지 활성화사업 및 단계한옥마을 관광자원개발사업 연계 추진

□ 추진사항

❍ 단성시장

- 2020 전통시장 시설현대화사업 사전컨설팅 시행 : 2018. 11월

- 2020 전통시장 시설현대화사업 신청 : 2019. 2월

- 2020 전통시장 시설현대화사업 확정 통보(경남도) : 2019. 10월

- 2020 전통시장 시설현대화사업(전환) 보조금 교부통지 : 2020. 2월

- 단성시장 화장실설치사업 실시설계 용역, 건축 협의(완료) : 2020. 5월

※ 단성시장 노후전기시설 문제점 도출(화장실 설치사업 보류)

- 군의회 행정간담회, 경남도 및 경남지방중소벤처기업청 협의 : 2020. 7월

- 2021 노후전선정비사업(단성시장) 공모사업 신청, 현장평가 : 2020. 7.~ 8월

- 2021 노후전선정비사업(단성시장) 공모사업 선정 : 2020. 9월

- 단성시장 노후전선정비사업 실시설계 용역 완료 : 2021. 1월

❍ 단계시장

- 신등면 농촌중심지활성화 기본계획 수립 완료 : 2019. 5월

- 신등면 농촌중심지활성화사업 실시설계 착수 : 2019. 5월

- 신등면 농촌중심지활성화사업 시행계획 승인 : 2020. 2월

- 신등면 농촌중심지활성화사업 실시설계 완료 : 2020. 5월

- 단계 한옥마을 관광자원개발사업(저잣거리조성) 실시설계 및 건축 인허가 협의 : 2020. 5월 ~ 10월

- 단계한옥마을 관광자원개발사업(저잣거리조성) 착공 : 2020. 11월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	1,297	1,072	225
국비	113	57	56
도비	643	643
군비	530	372	158
기타	11		11

□ 향후 추진계획

❍ 단성시장

- 단성시장 노후전선정비사업 및 화장실설치사업 준공 : 2021. 6월

❍ 단계시장

- 단계한옥마을 관광자원개발사업(저잣걸기조성) 준공 : 2021. 6월

- 신등면 농촌중심지활성화사업 착수 : 2021. 2월