관리번호	4-16	담당부서	안전건설과 하천담당
추진실적	50%(정상추진)	완료예상	2022년 12월

경호강 관광화 사업(백리길 자전거도로 조성사업)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 10 ~ 2022. 12.

❍ 위    치 : 산청군 단성면 관정리 ~ 금서면 주상리 지내

❍ 소요예산 : 56억원(국비 36.4, 군비 19.6)

❍ 사업내용 : 자전거도로 개설 B=3.0~5.0m L=46.5㎞

□ 추진사항

❍ 2018. 7.  : 경호강 백리길 조성사업 기본노선 조사 착수

❍ 2018. 10. : 산청군 ~ 진주시 상생협의회 과제 선정

❍ 2018. 12. : 백리길 조성사업 기본계획(안) 도출 및 착공

❍ 2019. 12. ~ 현재 : 경호강 백리길 조성사업 발주 및 착공

❍ 2020. 12. : 경호강 백리길(범학지구) 조성사업 실시설계용역 완료

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	5,600	2,000	1,000	2,600
국비	3,640	390	650	2,600
도비
군비	1,960	1,610	350
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 본 사업의 원활한 추진과 금서면 주상리까지의 자전거 도로개설을 위해서 국ㆍ도비 예산의 확보가 절실히 필요한 사항으로

❍ 중앙부처 및 경상남도의 관련부서와 지속적 방문 등으로 다각적인

측면에서 예산 확보 노력이 필요함

□ 향후 추진계획

❍ 미 확보 예산에 대해서는 국비 전환사업으로서 경상남도와 긴밀하게

협의하여 예산확보를 다각적으로 노력하겠음