관리번호	5-1	담당부서	안전건설과 도로담당 (담당자 송병기)
추진실적	80%(정상추진)	완료예상	2020년 12월

마을연결 생활권 도로사업

□ 사업개요

공사명	위치	사업내용	소요예산 (억원)	사업기간	비고
합 계	5개소	L=2.60km	52
차황우사 버스진출입도로정비	차황면 우사리	L=0.35km	7	2018.01. ~2019.12.	완료
오부중매 버스진출입도로정비	오부면 내곡리	L=0.53km	10	2018.01. ~2020.04.	80%
삼장신촌 버스진출입도로정비	삼장면 대하리	L=0.47km	11	2018.01. ~2019.12.	완료
신등수청 버스진출입도로정비	신등면 양전리	L=0.40km	7	2019.01. ~2019.12.	완료
신안구담 버스진출입도로정비	신안면 외고리	L=0.85km	17	2019.01. ~2020.12.	10%

□ 추진사항

❍ 공사완료(3건) : 차황우사, 삼장신촌, 신등수청

❍ 공 사 중(2건) : 오부중매, 신안구담

□ 문제점 및 대책

❍ 정상추진중

□ 향후 추진계획

❍ 2020.04. : 오부중매 사업완료

❍ 2020.12. : 신안구담 사업완료

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 (~2019년)	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	5,185	4,065	1,120
차황우사	700	700					군비
오부중매	1,000	1,000					군비
삼장신촌	1,065	1,065					군비
신등수청	700	700					군비
신안구담	1,720	600	1,120				군비

□ 현황사진(오부중매)

□ 현황사진(신안구담)