관리번호	5-20	담당부서	안전건설과 도로담당 (담당자 이창훈)
추진실적	10%(정상추진)	완료예상	2022년 10월

원지교차로 개선

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019.11. ~ 2022.10.

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리

❍ 소요예산 : 30억원

❍ 사업내용 : 교량확장 L=120.0m, 도로개선 L=150.0m

□ 추진사항

❍ 2018. 01. : 제6차(‘18~’22)국도병목지점개량사업 반영

❍ 2019. 03. ~ 2019.10. : 실시설계용역 추진

❍ 2019. 11. ~ 2020.01. : 공사발주 및 행정절차 이행

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	3,000	50	1,330	1,620
국비	3,000	50	1,330	1,620
도비
군비
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 사업비가 많이 투입되는 사업으로 연차별 예산확보 시행에 따른 사업 장기화

❍ 정상추진 사업지구로서 사업비 집중투입을 통한 조기완공 건의

□ 향후 추진계획

❍ 2019.11. ~ 2022.10. : 사업추진

❍ 2020.02. : 실착수 예정

□ 현황사진(평면도)