관리번호	5-2	담당부서	안전건설과 농업기반담당
추진실적	82%(정상추진)	완료예상	2023년 12월

오성지구, 방곡지구 다목적용수개발사업 조기 준공

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2015. 9 ~ 2023. 12

❍ 위    치 : 오부면 및 금서면 방곡리 일원

❍ 소요예산 : 649억원(국비 649)

※ 오성지구 19,928백만원, 방곡지구 45,027백만원

❍ 사업내용 : 용수개발 422.5ha(오성지구 77.5ha, 방곡지구 345ha)

❍ 시 행 처 : 한국농어촌공사 진주·산청지사

□ 추진사항

❍ 오성지구 [사업비 199억중 168억 확보, 현 공정율 84%]

- 2017. 6. : 시행계획 승인(경상남도)

- 2017. 9. : 공사 계약체결[한국개발(주)외 2개사] 및 착공

❍ 방곡지구 [사업비 450억중 362억 확보, 현 공정율 80%]

- 2015. 6. : 시행계획 승인(경상남도)

- 2015. 9. : 공사 계약체결[진지건설(주)외 2개사] 및 착공

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	64,955	52,932	9,665	2,358
국비	64,955	52,932	9,665	2,358
도비
군비
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 한국농어촌공사 시행 전액 국비 지원 사업으로 조기완공을 위해 국비 조속

확보토록 지속 건의(농림축산식품부)

□ 향후 추진계획

❍ 조기완공을 위해 국비 조속 확보토록 지속 건의(농림축산식품부)

❍ 2022. 12. : 방곡지구 다목적용수개발사업 준공

❍ 2023. 12. : 오성지구 다목적용수개발사업 준공