관리번호	5-11	담당부서	안전건설과 농업기반담당 (담당자 김광웅)
추진실적	10%(정상추진)	완료예상	2023년 12월

신연지구 배수개선사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 1 ~ 2023. 12

❍ 위    치 : 산청군 생초면 신연리 일원

❍ 소요예산 : 6,000백만원(균특 4,800, 도비 360, 군비 840)

❍ 사업내용 : 배수장 1개소, 배수로 L=3.20km

□ 추진사항

❍‘18. 3월 : 예정지 조사 및 기본계획

❍‘19. 1월 ~ 19. 12월 : 실시설계용역 시행

❍‘20. 1월 ~ 20. 6월 : 시행계획 검토 및 승인(경상남도)

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	6,000	500	1,800	1,500	1,200	1,000
국비	4,800	400	1,440	1,200	960	800
도비	360	30	108	90	72	60
군비	840	70	252	210	168	140
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 많은 사업비가 소요되는 대형사업으로 년도별 국도비 예산확보에 차질 발생 우려

□ 향후 추진계획

❍ 중앙부처, 경남도와 긴밀한 공조체계를 구축하여 예산확보에 주력

❍ 2020년 6월 : 신연지구 배수개선사업 착공

❍ 2023년 12월 : 신연지구 배수개선사업 준공

□ 계획 평면도

1.11㎞