관리번호	5-4	담당부서	안전건설과 도로담당 (담당자 이창훈)
추진실적	5%(정상추진)	완료예상	2024년 12월

국도59호선(창주~구생기간)우회도로 개설

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년

❍ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 ~ 산청읍 지리

❍ 소요예산 : 156억원

❍ 사업내용 : 우회도로개설 L=0.9km(도로 L=0.6km, 교량 L=0.3km)

□ 추진사항

❍ 2016년 08월 : 제4차 국도 및 국지도건설 5개년계획(‘16∼’20) 반영(국토부)

❍ 2018년 12월 : 용역비 3억원 확보

❍ 2019년 04월 : 실시설계용역 착수

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	15,600	700	200	4,900	4,900	4,900
국비	15,600	700	200	4,900	4,900	4,900
도비
군비
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 사업비 과다에 따른 사업기간 장기화 우려

❍ 시행청인 부산지방국토관리청에 사업비 집중투입을 통한 조기완공 건의

□ 향후 추진계획

❍ 2020년 03월 : 노선결정예정

❍ 2020년 12월 : 실시설계용역 완료

❍ 2021년 : 공사발주

❍ 2024년 : 공사완료

□ 현황사진(노선도)