관리번호	5-4	담당부서	안전건설과 도로담당
추진실적	10%(정상추진)	완료예상	2024년 12월

국도59호선(창주~구생기간)우회도로 개설

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년

❍ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 ~ 산청읍 지리

❍ 소요예산 : 156억원(국비 156)

❍ 사업내용 : 우회도로개설 L=0.9km(도로 L=0.6km, 교량 L=0.3km)

□ 추진사항

❍ 2016.  8. : 제4차 국도 및 국지도건설 5개.계획(‘16∼’20) 반영(국토부)

❍ 2018. 12. : 용역비 3억원 확보

❍ 2019.  4. : 실시설계용역 착수

❍ 2019.  8. : 관계기관 협의(1차)

❍ 2021.  2. : 관계기관 협의(2차)

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020. )	‘21.	‘22.	‘23. 이후	비고
계	15,600	900	300	5,000	9,400
국비	15,600	900	300	5,000	9,400
도비
군비
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 사업비 과다에 따른 사업기간 장기화 우려

❍ 시행청인 부산지방국토관리청에 사업비 집중투입을 통한 조기완공 건의

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 12. : 실시설계용역 완료

❍ 2022. : 공사발주

❍ 2024. : 공사완료

□ 현황사진