관리번호	5-10	담당부서	안전건설과 도로담당
추진실적	10%(정상추진)	완료예상	2024. 12월

지방도 1001호선(내리~어천간)확포장공사

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020. ~ 2024.

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 내리 ~ 단성면 방목리

❍ 소요예산 : 246.6억원(도비 246.6)

❍ 사업내용 : 도로확포장 및 개설 L=5.91km, B=10.5m

□ 추진사항

❍ 2003.  2. : 지방도 노선지정

❍ 2017. 12. : 경상남도 도로건설관리계획 반영(2016~2020)

❍ 2020.  6. : 특별조정교부금 신청

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020. )	‘21.	‘22.	‘23. 이후	비고
계	24,660			3,000	21,660
국비
도비	24,660			3,000	21,660
군비
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 경상남도 도로건설 관리계획에는 반영되어 있으나 투자 심사 미승인

❍ 투자심사 승인이 되도록 지속적으로 건의하여 사업 조기 추진

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 6. : 경상남도 지방재정투자심사

❍ 2022. 1. : 실시설계 추진 계획

□ 현황사진