관리번호	5-5	담당부서	안전건설과 농업기반담당 (담당자 김광웅)
추진실적	5%(정상추진)	완료예상	2022년 6월

신촌, 일물 저수지 신설

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1 ~ 2022. 6

❍ 위    치 : 차황면 법평리 신촌, 오부면 일물리 일물마을 일원

❍ 소요예산 : 14,000백만원(국비 9,800, 도비 810, 군비 3,390)

❍ 사업내용 : 저수지 2개소 신설 : 신촌(11만톤), 일물(8만톤)

□ 추진사항

❍‘17. 12월 : 기본계획 수립 및 중앙 전문가 현지조사

❍‘18.  4월 : 행안부 상습가뭄재해지구 정비사업 계획 제출

❍‘19.  2월 : 기본조사 보고서 완료

❍‘20.  1월 : 실시설계용역 시행

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	14,000		2,000	6,000	6,000
국비	9,800		1,400	4,200	4,200
도비	810		90	360	360
군비	3,390		510	1,440	1,440
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 많은 사업비가 소요되는 대형사업으로 년도별 국도비 예산확보에 차질 발생 우려

□ 향후 추진계획

❍ 중앙부처, 경남도와 긴밀한 공조체계를 구축하여 예산확보에 주력

❍ 2021년  1월 : 신촌지구, 일물지구 공사착공

❍ 2022년 12월 : 신촌지구, 일물지구 공사준공

□ 계획 평면도