관리번호	5-5	담당부서	안전건설과 농업기반담당
추진실적	10%(정상추진)	완료예상	2024. 12월

신촌, 일물 저수지 신설

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1 ~ 2024. 12

❍ 위    치 : 차황면 법평리 신촌, 오부면 일물리 일물마을 일원

❍ 소요예산 : 140억원(국비 98, 도비 6.3, 군비 35.7)

❍ 사업내용 : 저수지 2개소 신설 : 신촌(11만톤), 일물(8만톤)

□ 추진사항

❍ 2017. 12. : 기본계획 수립 및 중앙 전문가 현지조사

❍ 2018.  4. : 행안부 상습가뭄재해지구 정비사업 계획 제출

❍ 2019.  2. : 기본조사 보고서 완료

❍ 2020.  1. : 실시설계용역 시행

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020. )	‘21.	‘22.	‘23. 이후	비고
계	14,000	2,000	1,000	3,000	8,000
국비	9,800	1,400	700	2,100	5,600
도비	630	90	90	-	450
군비	3,570	510	210	900	1,950
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 일물저수지 신설사업이 지역주민 중 안마을 주민들이 사업반대 의견 제시로 사업추진 어려움이 있어 저수지 대상부지 위치변경 등 사업반대 주민들과 협의과정 필요

□ 향후 추진계획

❍ 중앙부처, 경남도와 긴밀한 공조체계를 구축하여 예산확보에 주력

❍ 2021. 1. ~ 4. : 일물지구 사업관련 주민들과 협의

❍ 2021.  7. : 신촌지구 공사착공

❍ 2022.  1. : 일물지구 공사착공

❍ 2024. 12. : 신촌지구, 일물지구 공사준