관리번호	5-12	담당부서	안전건설과 도로담당 (담당자 이창훈)
추진실적	20% (정상추진)	완료예상	2022년 6월

고읍교 재가설(생초IC 진입교량)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리

❍ 소요예산 : 80억원(국비 75.2억, 군비 4.8억)

❍ 사업내용 : 교량재가설 L=184m, B=12m. 접속도로 L=425m, B=10~15m

□ 추진사항

❍ 2018. 01월 : 경상남도지역개발사업 기본계획 반영

❍ 2018. 10월 : 실시설계용역 착수

❍ 2019. 11월 : 총사업비 변경 승인

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	8,000	1,099	1,480	2,206	3,215
국비	7,520	1,099	1,103	2,103	3,215
도비
군비	480		377	103
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 교량 공정 상 우기 시 작업이 곤란하고 사업비 부족으로 인해 사업의 착수 시기 조정이 필요한 실정임

❍ 사업의 조기 완공을 위해 국비 조기 확보 계획

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 02월 ~ 04월 : 실시계획 승인

❍ 2020. 02월 : 공사계약

❍ 2020. 05월 : 공사착수

□ 현황사진

□ 평 면 도