관리번호	5-12	담당부서	안전건설과 도로담당
추진실적	20%(정상추진)	완료예상	2023. 03월

고읍교 재가설(생초IC 진입교량)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018. ~ 2023.

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리

❍ 소요예산 : 80억원(국비 75.2, 군비 4.8)

❍ 사업내용 : 교량재가설 L=184m, B=12m. 접속도로 L=425m, B=10~15m

□ 추진사항

❍ 2018.  1. : 경상남도지역개발사업 기본계획 반영

❍ 2018. 10. : 실시설계용역 착수

❍ 2019. 11. : 총사업비 변경 승인

❍ 2020.  2. ~ 4. : 실시계획 승인

❍ 2020.  2. : 공사계약

❍ 2020.  5. : 공사착수

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020. )	‘21.	‘22.	‘23. 이후	비고
계	8,000	2,579	2,663	2,758
국비	7,520	2,202	2,663	2,655
도비
군비	480	377		103
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 교량 공정 상 우기 시 작업이 곤란하고 사업비 부족으로 인한 확보 노력

❍ 사업의 조기 완공을 위해 국비 조기 확보 계획

□ 향후 추진계획

❍ 2023. 3. : 공사준공

□ 현황사진

□ 평 면 도