관리번호	5-14	담당부서	안전건설과 도로담당 (담당자 이창훈)
추진실적	20%(기타)	완료예상	2023년 02월

국지도60호선(동의보감촌~화계간) 선형개량사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2017.04. ~  2023.02.

❍ 위    치 : 산청군 금서면 특리 ~ 화계리

❍ 소요예산 : 183억원

❍ 사업내용 : 도로선형개량 L=3.2km, B=10.5m

□ 추진사항

❍ 2016년 08월 : 제4차 국도 및 국지도건설 5개년계획(‘16∼’20) 반영

❍ 2017년 04월 : 실시설계용역 착수

❍ 2019년 12월 : 실시설계용역 완료

❍ 2020년 01월 : 사업이관(부산지방국토관리청=>경상남도)

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	18,300	1,145	6,000	5,000	6,155
국비	18,300	1,145	6,000	5,000	6,155
도비
군비
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 사업비 과다소요로 인해 연차별 예산확보 시행에 따른 사업 장기화

❍ 사업비 집중투입을 통한 조기완공 건의

□ 향후 추진계획

❍ 2020년 02월 ~ 06월 : 행정절치 이행 후 발주예정

❍ 2020년 07월 ~ 12월 : 보상추진 및 사업착수

❍ 2023년 02월 : 공사완료

□ 현황사진(위치도)

□ 조감도

[금서터널 시점부]	[신아교차로]	[노선종점부/특리삼거리]