관리번호	5-7	담당부서	안전건설과 하천담당
추진실적	50%(정상추진)	완료예상	2022. 12월

하천 정비를 통한 수해예방

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 2. ~ 2022. 12.

❍ 위    치 : 산청군 금서면 평촌리 외 3개소 지내

❍ 소요예산 : 270억원(국비 135, 도비 118.5, 군비 16.5)

❍ 사업내용

<단위:억원>

사 업 명	내 용	사업비	추진진도(%)	비 고
계		270	40%
금서천	하천정비 L=3.9㎞	218	-	계약심사 중
봉두지구	재해위험개선 L=1.7㎞	47	30	설계심사 중
상법천(손항〜법물)	하천정비 L=0.26㎞	5	100	완료
양천(오동지구)	현재 경상남도에서 수립중인 하천기본계획수립에 따라 검토해야 할 사항 임

□ 추진사항

❍ 2019.  6 : 하천수해예방사업 실시설계완료 및 사업추진

❍ 2019.  8 : 상법천(손항〜법물)하천재해 공사 준공

❍ 2020. 12 : 상법천(손항지구) 지방하천 정비공사 설계 및 발주

❍ 2021.  9 : 상법천(손항지구) 지방하천 정비공사 준공계획

❍ 2022. 12 : 봉두지구 및 금서천 준공 계획

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020 )	‘21.	‘22.	‘23. 이후	비고
계	27,000	9,165	9,115	8,720
국비	13,500	4,700	4,400	4,400
도비	11,855	3,215	4,320	4,320
군비	1,645	1,250	395
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 경상남도에서 추진하는 금서천 정비사업의 지속적인 관리 및 조기 준공 독려

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 12. 준공계획인 봉두지구 자연재해 위험지구 개선사업 관리 감독 철저