관리번호	5-15	담당부서	안전건설과 도로담당
추진실적	10%(정상추진)	완료예상	2023. 12월

지막도로 확포장공사

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. ~ 2023.

❍ 위    치 : 산청군 금서면 지막리

❍ 소요예산 : 36억원(군비 36)

❍ 사업내용 : 도로확포장 L=858.0m, B=5.5m(6.5m)

□ 추진사항

❍ 2019. 1. ~ 6. : 실시설계 용역 추진

❍ 2019. 6. ~ 현재 : 보상협의 추진 및 행정절차 이행

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020. )	‘21.	‘22.	‘23. 이후	비고
계	3,600	800		2,800
국비
도비
군비	3,600	800		2,800
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 토지편입 거부 등으로 보상협의 애로 예상

❍ 적극적인 보상협의와 토지수용 병행

□ 향후 추진계획

❍ 2021.  1. ~ 12. : 보상협의 추진 및 행정절차 이행

❍ 2022.  1. : 사업 착수

❍ 2023. 12. : 사업 완료

□ 현황사진