관리번호	5-8	담당부서	안전건설과 도로담당 (담당자 이창훈)
추진실적	45%(정상추진)	완료예상	2022년 06월

밤머리재 터널공사 조기마무리 및 주변개발

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2016.04. ~  2023.03.

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 홍계리 ~ 금서면 매촌리

❍ 소요예산 : 1,027억원

❍ 사업내용 : 도로확포장 L=6.0km, B=11.5m(터널 L=3.0km, 도로 L=3.0km)

□ 추진사항

❍ 2017. 02월 : 사업 착수

❍ 2018. 07월 : 터널 굴착작업 착수

❍ 2019. 08월 : 터널 굴착작업 완료(L=3.0km)

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	102,700	55,000	12,800	17,450	17,450
국비	102,700	55,000	12,800	17,450	17,450
도비
군비
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 사업비가 많이 투입되는 사업으로 연차별 예산확보 시행에 따른 사업 장기화

❍ 정상추진 사업지구로서 사업비 집중투입을 통한 조기완공 건의

□ 향후 추진계획

❍ 2022. 06월 : 사업완료(9개월 공기단축)

□ 위 치 도

□ 조감도

[산청터널 시점부]	[평촌교차로/산청터널 종점부]	[금서교/노선종점부]