관리번호	5-17	담당부서	안전건설과 도로담당 (담당자 이창훈)
추진실적	20%(정상추진)	완료예상	2023년 12월

중산~내대간 연결도로개설

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2023년

❍ 위    치 : 산청군 시천면 중산리 ~ 내대리

❍ 소요예산 : 85억원(도비 30억, 군비 55억)

❍ 사업내용 : 도로개설 L=3.0km, B=6.5m(8.0m)

□ 추진사항

❍ 2018년 04월 : 1차 중산지구 실시설계 완료

❍ 2018년 03월 ∼ 12월 : 1차 중산지구 보상협의 추진

❍ 2019년 10월 : 행정절차 이행 완료 및 사업발주

❍ 2019년 11월 : 1차 중산지구 사업착수

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	8,500	940	800	3,200	3,560
국비
도비	3,000			1,500	1,500
군비	5,500	940	800	1,700	2,060
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 사업비가 많이 투입되는 사업으로 연차별 예산확보 시행에 따른 사업 장기화

❍ 조기착수 및 완공을 위해 지속적으로 도비 지원 건의

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 09월 : 1차 중산지구 사업완료

❍ 2021년 이후 : 2차 내대지구 사업계획 수립 및 추진

□ 현황사진