관리번호	5-17	담당부서	안전건설과 도로담당
추진실적	70%(정상추진)	완료예상	2023. 12월

중산~내대간 연결도로개설

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2017. ~ 2023.

❍ 위    치 : 산청군 시천면 중산리 ~ 내대리

❍ 소요예산 : 85억원(도비 30, 군비 55)

❍ 사업내용 : 도로개설 L=3.0km, B=6.5m(8.0m)

□ 추진사항

❍ 2018.  4. : 1차 중산지구 실시설계 완료

❍ 2018.  3. ∼ 12월 : 1차 중산지구 보상협의 추진

❍ 2019. 10. : 행정절차 이행 완료 및 사업발주

❍ 2019. 11. : 1차 중산지구 사업착수

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020. )	‘21.	‘22.	‘23. 이후	비고
계	8,500	1,740	1,400	3,800	1,560
국비
도비	3,000		500	1,000	1,500
군비	5,500	1,740	900	2,800	60
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 사업비가 많이 투입되는 사업으로 연차별 예산확보 시행에 따른 사업 장기화

❍ 조기착수 및 완공을 위해 지속적으로 도비 지원 건의

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 12. : 1차 중산지구 사업완료

❍ 2021.이후 : 2차 내대지구 사업계획 수립 및 추진

□ 현황사진