관리번호	5-18	담당부서	안전건설과 도로담당 (담당자 송병기)
추진실적	100%(완료)	완료예상	완료

지방도1047호(내대지구)굴곡도로 개량

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019.09. ~ 2020.02.

❍ 위    치 : 산청군 시천면 내대리

❍ 소요예산 : 5억원

❍ 사업내용 : 도로선형개량 L=200.0m

□ 추진사항

❍ 2018년 12월 : 경상남도 굴곡도로 개량사업 반영

❍ 2019년 01월 ∼ 06월 : 실시설계 용역 및 보상협의 추진

❍ 2019년 09월 : 사업착수

❍ 2020년 01월 : 사업완료

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	500	500
국비
도비	500	500
군비
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 없음

□ 향후 추진계획

❍ 사업완료

□ 현황사진