관리번호	5-21	담당부서	안전건설과 도로담당 (담당자 송병기)
추진실적	10%(정상추진)	완료예상	2022년 12월

내고~갈전간 도로확포장공사

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

❍ 위    치 : 산청군 신안면 외고리 ~ 갈전리

❍ 소요예산 : 26억원

❍ 사업내용 : 도로확포장 L=1.3km, B=5.5m(6.5m)

□ 추진사항

❍ 2019년 01월 ~ 05월 : 실시설계용역 추진

❍ 2019년 06월 ~ 12월 : 보상협의 및 행정절차 이행

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	2,600	40	300	1,000	1,260
국비
도비
군비	2,600	40	300	1,000	1,260
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 사업비 과다 소요 및 농지편입에 따른 보상협의에 어려움이 있음

❍ 연차별 예산확보 추진 및 보상협의 지속 추진

□ 향후 추진계획

❍ 2020년 01월 ∼ 12월 : 보상협의 추진 및 행정절차 이행

❍ 2021년 01월 : 사업 착수

❍ 2022년 12월 : 사업 완료

□ 현황사진