관리번호	5-9	담당부서	안전건설과 도로담당
추진실적	100%(완료)	완료예상	2021. 6월

국도20호선(생비량~단성~시천)공사 조기착공

□ 사업개요

공 사 명	위 치	사업내용	소요예산 (억원)	사업기간	비고
계	2개소	L=12.2km	1,902
신안~생비량	단성면 강누리 생비량면 도리	L=9.2km B=19.5m	1,488	2020 ~ 2027
단성~시천2	단성면 길 리 단성면 사월리	L=3.0km B=19.5m	414	2019 ~ 2024

□ 추진사항

❍ □신안~생비량간□

- 2019.  2. : 예비타당성 면제

- 2019.  3. ~ 12. : 사업적격성 심사(기재부) 및 행정절차 이행

- 2020.  7. : 사업발주 및 행정절차이행

- 2021. 12. : 보상

❍ □단성~시천2□

- 2018.  9. : 실시설계 완료

- 2019. 12. : 공사발주 및 행정절차이행

- 2020.  1. : 사업착수

- 2020. 12. : 보상

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 (~2020.)	‘21.	‘22.	‘23. 이후	비고
계	289,321	13,136	28,140	25,000	123,945
신안~생비량	148,821	6,436	21,140	15,000	106,245
단성~시천2	41,400	6,700	7,000	10,000	17,700

□ 문제점 및 대책

❍ 단성∼시천1 구간은 타당성 부족으로 중기계획 반영에 어려움이 있음

❍ 침수구간(소리당 1.7km) 우선 반영 건의

□ 향후 추진계획

❍ □신안~생비량간□

- 2020.  4. ~ 12. : 보상협의 추진 및 사업착수

- 2027. 12. : 사업완료

❍ □단성~시천2□

- 2024. 11. : 사업완료