관리번호	5-23	담당부서	상하수도과 상수도담당 (담당자 이현필)
추진실적	30% (정상추진)	완료예상	2022년 12월

지방상수도 수혜지역 확장

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2022. 12월

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 소요예산 : 50,260백만원(국7,004/ 도27,777/ 군15,079)

❍ 사업내용 : 산청, 단성, 시천 급수구역 확장

- 정수장 증설(단성, 시천), 배수지 설치(오부, 삼장)

- 관로매설 L=120km, 가압장 및 감압면 설치 1식

□ 추진사항

❍ 2017. 05월 : 산청 및 단성 급수구역 실시설계 용역 착수

❍ 2018. 11월 : 시천 급수구역 확장사업(1지구) 부분 준공(삼장면 신촌 ~ 대포)

❍ 2019. 02월 : 산청군 수도정비기본계획(변경) 수립

❍ 2019. 05월 : 단성취수장(집수매거) 하천점용 등 인·허가 및 공사 착공

❍ 2019. 10월 : 산청 및 단성 급수구역 실시설계 용역 준공

❍ 2019. 12월 : 시천급수구역(삼장면 대포 ~ 홍계) 총사업비 변경 승인

❍ 2020.  2월 : 시천 급수구역 확장사업(2지구) 시행

❍ 2020.  2월 : 산청 급수구역 확장사업(오부지구) 시행

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	50,260	10,579	6,143	20,642	9,896	3,000
국비	7,404	7,404
도비	27,777		4,300	14,450	6,927	2,100
군비	15,079	3,175	1,843	6,192	2,969	900
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 수도정비기본계획 변경 수립 지연으로 지방상수도 확장사업이 다소 지연되었으나, 2019년 2월 환경부 최종 승인으로 급수 구역별 예산확보 및 공사 추진

□ 향후 추진계획

❍ 2020.  3월 : 산청, 시천, 단성급수구역 인·허가 및 공사 착수

❍ 2020.  4월 : 시천급수구역(정수장증설 등) 예산 신청

❍ 2021. 12월 : 산청급수구역 지방상수도 확장사업 준공예정

❍ 2022. 12월 : 시천, 단성급수구역 지방상수도 확장사업 준공예정

□ 계획평면도