관리번호	5-22	담당부서	상하수도과 상수도담당 (담당자 이현필)
추진실적	91%(정상추진)	완료예상	2020년 4월

지방상수도 인입공사 조기 마무리(생비량지구)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2020.6월

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 소요예산 : 14,951백만원(국9,766/ 군5,185)

❍ 사업내용 : 생비량면 지방상수도 급수구역 확장

- 배수지(300톤) 1식, 관로매설 77.1㎞, 관로매설 구간 포장 1식

- 가압장 4개소, 전기 및 제어설비 1식

□ 추진사항

❍ 2015. 12월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 착공(총괄분)

❍ 2018. 10월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 준공(1,2,3차분)

❍ 2019. 04월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 기성(4차분)

❍ 2019. 04월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 포기(시공사 영일개발)

❍ 2019. 05월 ~ 09월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 타절 정산

❍ 2019. 10월 : 생비량면 지방상수도 인입공사(잔여분) 착공

□ 연차별 사업예산                                         (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	14,951	14,951
국비	9,766	9,766
도비
군비	5,185	5,185
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 당초 시공사 업체부도로 공사가 다소 지연되었으나 타절준공이후 잔여분 공사 발주로 계회공정 만회

❍ 단성정수장 공급수량 부족으로 생비량지구 공사 완료시 전지역 상수공급이 어려우나, 수량부족 및 수질불량 지역을 선정하여 우선적으로 공급

□ 향후 추진계획

❍ 2020.  4월 : 생비량지구 지방상수도 시운전 및 공사 준공

□ 계획평면도