구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 도시재생담당 (담당자 김현지, 7313)
	1-8
추진실적 (기준일)	10%(장기추진) (2025. 1월 기준)		완료예상	2028년 12월
			목표달성여부	부

도시재생사업(옥산지구)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2023 ~ 2028년

❍ 위       치: 산청군 산청읍 옥산리 163-1번지 일원(옥산지구)

❍ 총 소요예산: 26,921백만원(국비 15,000, 도비 2,000, 군비 9,646, 기타 275)

* 2024. 12월 도시재생 공모사업 미선정

❍ 사 업 내 용: k-웰니스 트레킹 허브 거점조성사업, 한마음공원 리모델링, 시장골목 웰니스 광장 등

□ 주요 추진사항

❍ 도시재생활성화계획 수립 용역 착수	: 2024.  2월

❍ 활성화계획 수립 및 행정절차 이행	: 2024.  2월 ~ 9월(신청)

❍ 도시재생사업 공모신청	: 2024.  9월

❍ 도시재생사업 공모미선정	: 2024. 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
17,500	26,921	4,880	219	-	-	219	-	219	-	-	219	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	26,921	-	-	-	200	3,150	1,530	22,041
국비	15,000	-	-	-	-	1,810	900	12,290
도비	2,000	-	-	-	-	250	120	1,630
군비	9,646	-	-	-	200	1,090	510	7,846
기타	275	-	-	-	-	-	-	275

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
도시재생 사업 (옥산지구)	소계	219	170	-	-	-	-	200	170	19	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	219	170	-	-	-	-	200	170	19	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 도시재생분야 정부정책 여건 변화로 사업 규모 및 예산 축소

❍ 공모사업 선정 및 국비 예산확보를 위한 다방면 노력

□ 향후 추진계획

❍ 활성화계획 수립 및 행정절차 이행, 공모신청	: 2025.  2월 ~  9월(신청)

❍ 공모사업(지역특화재생형) 선정 결정	: 2025. 12월

❍ 공모사업 추진	: 2026.  1월 ~ 2028. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 도시재생담당 (담당자 지효수, 7311)
	1-8
추진실적 (기준일)	10%(장기추진) (2024. 8. 28. 기준)		완료예상	2028년 12월
			목표달성여부	부

도시재생사업(옥산지구)(변경)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2023 ~ 2028년

❍ 위       치: 산청군 산청읍 옥산리 163-1번지 일원(옥산지구)

❍ 총 소요예산: 269.21억원(국비 150, 도 20, 군 96.46, 기타 2.75)

* 2024. 12월 도시재생 공모사업 선정 후 확보 가능

❍ 사 업 내 용: 활력더함 복합거점센터조성, 약선테마거리조성, 시장환경정비 등

□ 주요 추진사항

❍ 도시재생사업 공모 미선정	: 2021.  1월

❍ 도시재생사업 공모 미선정	: 2022. 12월

❍ 도시재생활성화계획 수립 용역 착수	: 2024.  2월

❍ 도시재생사업(특화재생) 국토부(HUG) 컨설팅	: 2024.  6월

❍ 주민공청회 실시	: 2024.  8월

❍ 군의회 의견청취 실시	: 2024.  9월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
17,500	26,921	4,880	200	-	-	200	-	200	-	-	200	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액			임기 내 투자 계획			임기 후
		21년 까지	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	26,921	-	-	-	200	3,150	1,530	22,041
국비	15,000	-	-	-	-	1,810	900	12,290
도비	2,000	-	-	-	-	250	120	1,630
군비	9,646	-	-	-	200	1,090	510	7,846
기타	275	-	-	-	-	-	-	275

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
도시재생 사업 (옥산지구)	합계	200	100	-	-	-	-	200	100
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	200	100	-	-	-	-	200	100
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 2024년 도시재생활성화계획 수립 용역 착수하여 진행하고 있으나, 국토부 방침 변경으로 공모물량 대폭 감소하여 선정 어려움

❍ 행정절차 조속한 이행으로 공모사업 추진

□ 향후 추진계획

❍ 공모사업 추진 및 신청	: 2024.  9월

❍ 공모사업(특화재생) 결정	: 2024. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 도시재생담당 (담당자 김현지, 7313)
	1-8
추진실적 (기준일)	10%(장기추진) (2024. 6월 기준)		완료예상	2028년 12월
			목표달성여부	부

도시재생사업(옥산지구)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2023 ~ 2026.(4년간)

- 변경: 2025년 ~ 2028년(4년간)

- 변경사유: 공모사업 미선정으로 인한 사업기간 변경

❍ 위       치: 산청군 산청읍 옥산리 160-1번지 일원(옥산지구)

❍ 총 소요예산: 17,500백만원(국비 10,500, 도비 2,100, 군비 4,900)

* 2024. 12월 도시재생 공모사업 선정 후 확보 가능

❍ 사 업 내 용: 활력더함 복합거점센터조성, 약선테마거리조성, 시장환경정비 등

□ 주요 추진사항

❍ 도시재생활성화계획 수립 용역 착수              : 2024.  2월

❍ 활성화계획 수립 및 행정절차 이행, 공모신청     : 2024.  2월 ~ 9월(신청)

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
17,500	17,500	17,500	200	-	-	200	-	200	-	-	200	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	17,500	-	-	4,951	7,348	4,128	1,073	-
국비	10,500	-	-	2,971	4,409	2,477	643	-
도비	1,400	-	-	396	588	330	86	-
군비	5,600	-	-	1,584	2,351	1,321	344	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
도시재생 사업 (옥산지구)	합계	200	100	-	-	-	-	200	100
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	200	100	-	-	-	-	200	100
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 도시재생분야 정부정책 여건 변화로 사업 규모 및 예산 축소

❍ 공모사업 선정 및 국비 예산확보를 위한 다방면 노력

□ 향후 추진계획

❍ 활성화계획 수립 및 행정절차 이행, 공모신청	: 2024.  2월 ~ 9월(신청)

❍ 공모사업(지역특화재생형) 선정 결정	: 2024. 12월

❍ 공모사업 추진	: 2025. 1. ~ 2028. 12.

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 도시재생담당 (담당자 김현지, 7313)
	1-8
추진실적	10% (장기추진)		완료예상	2028년 12월
			목표달성여부	부

도시재생사업(옥산지구)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2023 ~ 2026.(4년간)

- 변경: 2025년 ~ 2028년(4년간)

- 변경사유: 공모사업 미선정으로 인한 사업기간 변경

❍ 위       치: 산청군 산청읍 옥산리 160-1번지 일원

❍ 총 사 업 비: 175억원(국비 60%, 도비 12%, 군비 28%)

* 2024. 12월 도시재생 공모사업 선정 후 확보 가능

❍ 사 업 내 용: 활력더함 복합거점조성, 약선 특화 중심‧골목상권 활성화, 시장환경정비

□ 주요 추진사항

❍ 공모사업 신청(미선정)                                : 2022.   9월

❍ 방재계획 수립 등 사전절차 이행                      : 2023.   5월

❍ 도시재생활성화계획 수립 용역 사업자 선정            : 2024.   2월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
17,500	17,500	17,500	200	-	-	200	-	200	-	-	200	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	17,500	-	-	4,951	7,348	4,128	1,073	-
국비	10,500	-	-	2,971	4,409	2,477	643	-
도비	1,400	-	-	396	588	330	86	-
군비	5,600	-	-	1,584	2,351	1,321	344	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
도시재생 사업 (옥산지구)	합계	200	-	-	-	-	-	200	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	200	-	-	-	-	-	200	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 도시재생분야의 정부정책 여건 변화로 공모사업 및 예산 축소 가능

❍ 공모사업 선정 및 국비 예산확보를 위한 다양한 노력 필요

□ 향후 추진계획

❍ 2024년도 공모사업 신청                      : 2024.   9월

❍ 공모사업 결정 및 예산확보                   : 2024.  12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 도시재생담당 (담당자 정춘기)
	1-8
추진실적	5% (장기추진)		완료예상	2026년 6월
			목표달성여부	부

도시재생사업(옥산지구)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

❍ 위    치 : 산청읍 옥산리 160-1번지 일원

❍ 소요예산 : 17,500백만원(국비 10,500, 도비 1,400, 군비 5,600)

* 2023. 12월 도시재생 공모사업 선정 후 확보 가능

❍ 사업내용 : 약선 특화 중심‧골목상권 활성화, 주거환경개선 및 골목 정비

□ 추진사항

❍ 공모사업 추진                                        : 2022. 9. ~ 12월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	17,500			4,951	7,348	4,128	1,073
국비	10,500			2,971	4,409	2,477	643
도비	1,400			396	588	330	86
군비	5,600			1,584	2,351	1,321	344
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 도시재생분야의 정부정책 여건 변화로 공모사업 및 예산 축소 가능

❍ 국비 예상확보를 위한 다양한 노력 경주

□ 향후 추진계획

❍ 도시재생 활성화 계획 용역 시행                         : 2023.  3월

❍ 공모사업 신청                                          : 2023.  9월

❍ 공모사업 결정                                          : 2023. 12월